물가변동으로 인한 계약금액(ESC)조정 후 정산조정 방법

당 현장은 ＯＯ 시 발주 소각장 건설 턴키공사 현장으로 1,2차 ESC 조정 후 설계변경에 따른 ESC 조정금액 정산을 진행중에 다음과 같은 이견이 있어 질의 하오니 조속한 답변을 부탁드립니다.

ESC 개요

입찰일 : 2002.  11.  07.   계약일 : 2002.  12.  30.    계약금액 : \ 85,335,978,200 원

1차 ESC 조정기준일/조정율(%) :  2004.  01. 31.   5.99 %

1차 ESC 조정금액 : \ 4,728,591,000 원

2차 ESC 조정기준일/조정율(%) :  2004. 09. 30.  5.67 %

2차 ESC 조정금액 : \ 3,850,905,000 원

2차ESC 조정당시의 계약금액은 \ 85,335,978,200 원임

( 단, 2차 ESC 조정신청 당시(2004. 12. 02)에는 1차 ESC 조정신청에 따른 검토중으로 1차

ESC 조정금액의 미 확정(조달청 확정:2004. 12. 24)으로 2차ESC 조정신청 당시에는

1차ESC조정금액의 반영은 불가하였음)

정산ESC 개요

갑설 - 1차 ESC 정산 내용 :  \ 4,728,591,000원에서 \ 4,542,877,000원으로 조정

2차 ESC 정산 내용 :  \ 3,850,905,000원에서 \ 3,675,112,000원으로 조정

( 2차ESC 정산은 당시 1차ESC조정금액 반영없이 2차 ESC 조정금액 확정되었으므로 금번              정산에서도 동일 조건으로 1차ESC조정금액을  2차 ESC 정산시 미 반영이 타당함 )

설령 반영한다 하더라도 정산금액이 당초 확정금액(3,850,905,000원)을 초과하여서는 안됨.

을설 - 1차 ESC 정산 내용 :  \ 4,728,591,000원에서 \ 4,542,877,000원으로 조정

2차 ESC 정산 내용 :  \ 3,850,905,000원에서 \ 3,915,959,000원으로 조정

( 1차 ESC조정금액도 순차적인 물가변동으로 보아야하므로 2차ESC정산시 1차ESC조정금              액을 공제공식에 의하여 차감후 적용대가에 포함하여 정산을 하여야 타당함 )

상기와 같이 “갑”설과 “을”설중 어느 것이 타당한지 질의하오니 회신 부탁드립니다.