제목: 단품 슬라이드 비대상 공사에 대한 물가변동 업무관련 질의

1. 당 현장의 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 직전 조정일로부터     90일이 경과하고, 물가 조정율이 3% 이상 증감이 동시에 발생하는 조건 하에 품목 조정율로 물가변동을 실시하고 있습니다.

2. 질의 회신(접수번호 46872)을 통해 당 현장은 2006년 12월 29일 이전 계약 체결된 공사로서 ‘단품슬라이드’ 제도의 적용 대상이 아님을 알게 되었습니다.

3. 하지만 당 현장은 물가변동 조정 업무 시 재료비 반영에 있어 각종         물가지 이외에도 발주처에서 1년에 1회 제공하는「설계단가 적용기준」에    의거하여 재료비 단가를 산출하고 있습니다.

4. 발주처에서 제공하는 설계단가 적용기준은 매년 3월에 지급되며, 자재비가 상승하여 ESC조건이 충족되더라도 연중 동일한 자료인「설계단가 적용기준」을 적용해야 하므로 재료비 단가는 변함없이 사용해야 하는 실정입니다.

5. 이로 인해 자재단가의 변동이 급격하게 발생 하여 아래 예시한 바와 같이 특정 시점에서 ESC가 발생할 경우 일부품목(예)철근 등)에 대해서 시장 실거래 가격과 상당부분의 차이가 발생합니다.

※ ESC적용

품목	발주처설계단가 적용기준	물가정보	물가자료	거래가격	비고
철근(D13)	590,000	846,000	846,000	846,000

예시

※ 물가정보/물가자료/거래가격 : ‘08년 5월

발주처 설계단가 적용기준 : ‘08년 3월 발주처 제공

6. 위와 같이 급격한 자재단가 변경이 발생할 경우 「설계단가 적용기준」을 배제하고, 가격정보, 물가정보, 물가자료, 거래가격 등의 자료를 이용하여 ESC산출이 가능한 지 여부와 만일 가능하다면 그 방법은 어떠한 지에 대해서 알고 싶습니다.